내용증명서

수신1: ㈜정원하우징 대표 ○○○, 부대표 ○○○

사업장 주소: 충북 충주시 충원대로 930 오성빌딩 202호

수신2: ㈜정원하우징 대표 ○○○, 부대표 ○○○

주거지 주소: ________

발신: 이현숙, 박두희

주소: 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 대동아파트 101동 1205호

1. 귀사와 건축주 이현숙(이하 ‘당사’)는 2025년 00월 00일, [강원특별자치도 횡성군 횡성읍 정암리 479] 부지에 단독주택 신축 공사에 관한 계약을 체결하였습니다. 총 공사대금은 2억 원으로 정하였으며, 현재까지 총 1억 9천만 원을 귀사에 지급하였습니다.

2. 그러나 현재 공사는 전체 예정 공정의 약 30% 수준에 머물러 있으며, 귀사 측은 현재 연락이 두절되어 정상적인 공사진행이 이루어지지 않고 있습니다. 또한, 본 공사와 관련하여 당사가 총 1억 9천만 원 금액을 지급한 상태임에도 불구하고, 목수 및 현장 작업자들이 “자재를 받지 못해 작업을 중단했다.”는 사실을 확보했습니다.

2. 그러나 현재 공정률은 약 30% 수준에 불과하며, 귀사 측과의 연락이 되지 않아 정상적인 공사진행이 이루어지지 않고 있습니다. 특히 당사가 이미 지급한 공사대금에도 불구하고, 현장 작업자들로부터 “자재를 받지 못해 공사를 중단했다”는 사실을 확인하였습니다.

3. 이에 당사는 아래와 같이 요구합니다.

① 본 내용증명 수령일로부터 7일 이내에 건축주 이현숙, 박두희에게 연락을 취하고, 향후 공사 진행 계획 및 완공 예정일을 명확히 서면으로 통보할 것

② 아울러 2025년 7월 31일까지 공사를 재개할 것

4. 위 기한 내 회신 또는 공사 재개가 이루어지지 않을 경우, 귀사의 공사대금 유용 및 계약 불이행에 대해 민사상 손해배상 청구는 물론, 형사 고소를 포함한 모든 법적 조치를 진행할 것입니다.

5. 본 내용증명은 추후 민형사상 손해 배상 청구 등 모든 법적 절차에서 증거자료로 활용될 것입니다.

2025년 7월 8일

발신인: 이현숙 (서명 또는 날인)

박두희 (서명 또는 날인)